첨부 2	과제제안요구서(RFP)

내역사업명		방사선의료 정도관리 체계 구축

최종 연구목표
❍ 방사선의료 정도관리에 요구되는 측정표준, 정밀측정 및 평가 연구기반 구축

1단계 연구목표		❍ CT 방사선 국가표준 현시 ❍ 치료/핵의학 방사선 선량보증에 요구되는 감마선 기준조사장치/기준측정기 구축
구분	성과목표		연구내용	연구성과물
1차년도	PET-CT 방사선 측정표준화 연구기반 구축		□PET-CT 국가표준 조사장치 구축 □PET-CT 방사선 정밀측정용 Compton scatter 분광분석 장치 구축	□PET-CT 국가표준 조사장치 □Compton scatter 분광분석 장치
	치료방사선 선량보증 연구기반 구축		□국제품질시스템에 따른 Co-60 조사 실험실 구축 □Co-60 감마선 기준 조사장치 구축 □Co-60 감마선 정밀측정 시스템 구축 □Co-60 방사선장 특성분석 □Co-60 감마선량 기준측정 및 불확도 평가	□기준 조사장치 및 측정기 □기기운영절차서 □Co-60 선량평가 유효성
2차년도	CT 방사선 측정표준빔 구축		□PET-CT 국가표준 조사장치 구축(2년차) □Compton scatter 분광분석 및 언폴딩 □3D CMM 구축 □CT 국가표준빔 구축	□CT 국가표준빔 □Compton scatter 분광분석 및 언폴딩 데이터 □3D CMM
	방사선방호/핵의학 선량보증 연구기반 구축		□국제품질시스템에 따른 Cs-137 조사 실험실 구축 □Cs-137 감마선 기준 조사장치 구축 □Cs-137 감마선량 기준측정 및 불확도 평가 □핵의학핵종 방사능 정밀측정용 기준측정 시스템 구축	□기준 조사장치 및 측정기 □기기운영절차서 □Cs-137 선량평가 유효성 □핵의학핵종 방사능평가 유효성
3차년도	CT 방사선/이미지 측정표준 확립		□PET-CT 국가표준 조사장치 구축(3년차) □CT 방사선 절대측정, 불확도평가 □CT 이미지 국가표준 현시	□CT 방사선 국가표준 □CT 이미지 국가표준 □CT 방사선 절대측정 절차서
	근접치료방사선 선량보증 연구기반 구축		□국제품질시스템에 따른 근접치료용 조사 실험실 구축 □근접치료 감마선 기준 조사장치 구축 □방사선량 정밀측정 EPR 시스템 구축 □근접치료선량 측정용 물팬텀 시스템 구축 □물흡수선량 정밀평가 기술개발	□기준 조사장치 및 측정기 □기기운영절차서 □흡수선량 평가 유효성

2단계 연구목표		❍ PET 방사선 국가표준 현시 및 양성자선 국가표준기 구축 ❍ 진단방사선 이용 최적화에 필요한 엑스선 기준조사장치/기준측정기 구축
구분	성과목표		연구내용	연구성과물
1차년도	PET 측정표준화 연구기반 구축		□PET-CT 국가표준 조사장치 구축(4년차) □PET 핵종 (개봉선원) 취급 안전차폐 시스템 구축 □PET 소멸광자선 방사선 절대측정, 불확도 평가 □PET 이미지 국가표준 현시	□PET 방사선 국가표준 □PET 이미지 국가표준 □PET 방사선 절대측정 절차서
	진단엑스선 선량보증 연구기반 구축		□엑스선 기준 조사장치 구축 □진단영역 엑스선량 및 에너지 스펙트럼 기준측정기 구축 □유리선량계 시스템 구축 □선량평가용 인체모형 팬텀 구축 □진단엑스선 피폭선량(ESD, DAP, 흡수선량) 정밀평가 기술개발	□엑스선 기준 조사장치 □유리선량계 시스템 운영절차 □진단엑스선 선량평가 유효성
2차년도	양성자선 측정표준화 연구기반 구축		□PET-CT 국가표준 조사장치 구축(5년차) □양성자선 절대측정, 불확도 평가 □양성자선 국가표준기 구축	□양성자선 국가표준기 □양성자선 절대측정 절차서
	유방촬영엑스선 선량보증 연구기반 구축		□유방검사 기준 조사장치 구축 □엑스선량 및 에너지 스펙트럼 기준 측정기 구축 (20∼50 kVp) □평균유선선량 정밀평가 기술개발	□유방촬영엑스선 기준 조사장치 □유방촬영엑스선 선량평가 유효성

내역사업명		방사선 기술정보 통합 네트워크 구축 및 관련 전문가 양성

최종 연구목표
❍ 방사선기술 정보의 체계적인 수집·분석·제공을 위한 인프라 구축 ❍ 방사선기술 전문인력 양성 기반구축 및 실무 교육 시스템 구축

1단계 연구목표		❍ 방사선 기술정보 지원시스템 기반 구축 ❍ 방사선기술 전문인력 양성 기반구축 및 분야별 실습장비 구축
구분	성과목표		연구내용	연구성과물
1차년도	방사선 기술정보 시스템·DB 구축모델 정립		□정보자원 현황 및 수요 조사 □국내외 정보 표준분류체계 분석 □시스템·DB 구축모델 설계	□정보자원 및 수요조사 결과물 □시스템·DB 구축모델
	방사선기술 전문인력 실태조사‧분석 및 실무 교육 시스템 설계		□방사선기술 전문 인력수급 현황 및 실태 조사 □방사선기술 전문가 협의체 구축 □교육 커리귤럼 개발	□인력수급 모델 정립을 위한 기초자료 □방사선기술 분야 전문가 인력풀 구성 □측정•분석 시스템 매뉴얼 개발 □장비 교육 커리큘럼 개발 □장비교육 전문 인력양성
			<실무교육 시스템 설계> □방사선교육용 실험실습 시설 공동활용 협의체 구축 □실습 시스템 선정에 따른 실험실 설계
2차년도	방사선 기술정보 시스템·DB 운영기반 구축		□정보 수집모델(양식) 개발 □정보 표준분류체계 개발 □시스템·DB 구축(HW/SW) □정보 공동활용 협의체 구축	□정보 표준분류체계 □정보 수집모델
	방사선기술 인력양성 통합관리시스템 설계 및 측정/분석 실무교육 시스템 구축		□인력양성 통합관리 시스템 설계 □방사선 전문인력양성센터 구축(안) 설계 □현장연계 전문인력 양성 프로그램 개발	□인력 변동 추이 분석 보고서 □인력양성센터 구축 방안 보고서 □교육 프로그램 개발 및 인력배출 □측정•분석•교육 시스템 구축 □교육 과정 및 장비운영 매뉴얼 개발(I)
			<기초장비 실무교육 시스템 구축 I> □현장실습 매뉴얼 개발 □현장실무를 위한 측정/분석 장비 구축(저준위 알파/베타 장비 및 전처리 시설 구축)
3차년도	방사선 기술정보 통합 시스템·DB 연계기반 구축		□정보 수집 및 데이터베이스화 □시스템·DB 구축(HW/SW) 및 시뮬레이션 테스트 □유관기관간 통합 시스템·DB 구축모델 설계 □정보제공 프로그램 개발(분야별) □정보 공동활용 제도 개선사항 도출	□정보 데이터베이스화 실적 □시스템·DB 구축 □유관기관간 시스템·DB 연계모델 □분야별 동향분석보고서 모델
	방사선 전문인력양성센터 구축 및 감마선 핵종분석 시스템 구축		□통합관리 시스템 구축 □방사선 전문인력양성센터 구축 □산학 연계 프로그램 개발	□인력수급 시나리오 □통합관리 시스템(홈페이지 등) □분야별 커리큘럼 및 교재 □측정•분석•교육 시스템 □교육 과정 및 장비운영 매뉴얼 개발(II) □방사선수송해석 코드 교육용 서버 구축
			<기초장비 실무교육 시스템 구축 II> □감마선 핵종 분석 시스템 구축 □방사선수송해석 서버시스템 구축

2단계 연구목표		❍ 방사선기술 정보지원 네트워크 기반 확대 운영 ❍ 산학연 연계 교육프로그램 및 장비구축, 방사선 전문인력양성센터 구축
구분	성과목표		연구내용	연구성과물
1차년도	방사선 기술정보 통합 시스템·DB 연계 구축운영		□정보 수집 및 데이터베이스화 □유관기관간 통합 시스템·DB 개발 및 시범운영 □정보제공 프로그램 개발(원자력 시설정보, 통계/정보자동분류 등) □정보관리기관 지정추진 (지정요건 확보 등)	□정보 데이터베이스화 실적 □정보제공 프로그램 □동향분석보고서
	산학연 연계 방사선 전문인력 양성체계 구축 및 차폐/분석 시스템 구축		□산학 연계 통합관리 체계 개발 □전문인력양성센터 운영기반 구축	□산학연계 인력관리 프로그램 (홈페이지 기반) □센터운영(안) □방사선수송해석 코드 교육용 전산실 구축 □분석·교육 시스템 개발 □교육 과정 및 장비운영 매뉴얼 개발(III) □방사선수송해석 코드를 활용한 선량/차폐 평가 전문인력 양성
			<방호장비 실무교육 시스템 구축 I> □방사선수송해석 전산실 구축 □방사성물질 분석용 시스템 구축
2차년도	방사선 정보관리기관 운영기반 구축		□정보 수집 및 데이터베이스화 □유관기관간 통합 시스템·DB 시뮬레이션 테스트 □중장기 시스템·DB 유지보수절차서 개발 □정보제공 프로그램 확대 개발 □방사선 정보관리기관 지정 □방사선기술 정보정책 연구센터 구축운영(안) 마련	□정보시스템 및 DB 제공 실적 □시스템 및 DB 유지보수절차서 □동향분석보고서 □센터 구축운영(안)
	방사선 전문인력양성센터 확대 구축(총괄 컨트롤타워) 및 선량판독 시스템 구축		□인력수급 예측 모델 방안 수립 □전문 교육 기관 운영체계 확립 □방사선 전문인력양성센터 자립운영(안) 마련	□중․장기 인력수급 예측•통계 모델 개발 □산업 전분야 교육커리큘럼 운영 □전문인력양성센터 구축을 통한 중장기 운영계획(안) □교육 과정 및 장비운영 매뉴얼 개발(Ⅳ) □내/외부피폭 선량판독 시스템 교육과정 개발
			<방호장비 실무교육 시스템 구축 Ⅱ> □내/외부 피폭 선량 판독시스템 구축

내역사업명		대단위 다목적 전자선 실증연구센터

최종 연구목표
❍ 첨단 부품소재 개발 및 실용화 실증을 위한 대단위 다목적 전자선 실증연구센터 구축 - 전자선 실증연구센터 (연면적 3,300m2 규모) 건설 - 전자선 조사발생장치(10MeV, 2.5MeV 등 전자선 발생장치) 및 자동화 설비(연속식 공정 복합라인, 대형 이송장치) 구축 - 특수 맞춤형 자동화 설비 및 분석/제어/평가 시스템 구축 - 방사선 안전설비 구축 및 사용 인허가 획득

구분	성과목표	연구내용	연구성과물
1차년도	전자선 실증연구센터 설계	□ 실증연구센터(3,300 m2 규모) 설계 -실증연구센터 설계 -부대시설 설계 -실증연구센터 도면 허가 획득	□ 실증연구센터 도면
	자동화 설비/발생장치 설계	□ 자동화 시설/장비 구축 기본계획 수립 -시설/장비 구축계획 수립 -자동화 설비 설계 -대형 이송장치 발주	□ 자동화 설비 설계
2차년도	전자선 실증연구센터 건설공사	□ 실증연구센터 착공 -연구실험동 / 조사동 착공	□ 건설공사 일정관리 문서
	자동화 설비/발생장치 구축	□ 자동화설비/전자선 발생장치 1차 발주 -전자선 발생장치 발주(10MeV, 2.5MeV 등) -연속식 공정 복합라인 발주 -대형 이송장치 설치공사	□ 발주 계약서
3차년도	전자선 실증연구센터 건설공사	□ 실증연구센터 완공 -연구실험동 / 조사동 완공 -방사선 안전설비 구축	□ 연구실험동 / 조사동 완공 □ 방사선 안전설비 구축
	자동화 설비/발생장치 구축	□ 자동화설비/전자선 발생장치 1차 구축 및 2차 발주 -전자선 발생장치 구축 -연속식 공정 복합라인 구축 -대형 이송장치 공사 -전자선 조사설비 2차 발주	□ 10MeV, 2.5MeV 등 전자선 발생장치 조사시설 구축 □ 연속식 공정 복합라인 구축
4차년도	전자선 실증연구센터 구축	□ 실증연구센터 구축 완료 -방사선 관련시설 사용 인허가 획득	□ 실증연구센터 사용 인허가 획득
	자동화 설비/발생장치 구축	□ 자동화설비/전자선 발생장치 완료 -대형 이송장치 구축 -전자선 조사설비 구축 -분석 장비 구매 완료 -제어/평가 시스템 제작 완료	□ 대형이송장치 구축 □ 전자선 조사설비 구축 □ 분석/제어/평가 시스템 구축